Раздел 4 Документации об открытом аукционе в электронной форме.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №_______

г. Сортавала                                                                                            	 «___»  _______ 2012   г.	

Муниципальный заказчик – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детско-юношеская спортивная школа № 3 , именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  директора Евсеева А.А., действующего  на основании Устава, с одной стороны,   и   _______________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________ , действующего на основании ____________,  с другой стороны, в дальнейшем именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) по результатам открытого аукциона в электронной форме на  выполнение ремонтно-строительных работ в спортивном зале и помещениях МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3 по ул.Ладожской, 15, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №  _______ от  ______________ (приложение 1 к настоящему Контракту), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
По настоящему  Контракту:
1.1. Подрядчик принимает на себя  обязательства   по  выполнению ремонтно-строительных работ в спортивном зале и помещениях МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3 по ул.Ладожской,15 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить  работы в соответствие с локальной сметой,  являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2 к настоящему Контракту). 
1.3. Подрядчик обязуется завершить работы в срок, указанный  в п. 3.1 настоящего Контракта.
1.4. По окончании работ Подрядчик обязуется сдать результаты работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Контракта.
1.5. Заказчик  обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (Цена Контракта)  составляет  ______________ (________________________) руб. ____ коп. в т.ч. НДС (работы Подрядчика НДС не облагаются).
2.2. В Цену Контракта включены  расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, стоимость ремонтно-строительных работ, в т.ч. все подъемные и разгрузочно-погрузочные работы с применением ручного труда и техники, транспортные расходы, связанные с доставкой строительных материалов и оборудования с завода - изготовителя до склада Подрядчика или приобъектного склада, расходы, связанные с хранением материалов на складах, транспортные расходы, связанные с утилизацией строительного мусора и отходов, затраты на эксплуатацию и содержание машин и механизмов, содержание и охрану временных зданий и сооружений в т.ч. приобъектных складов, экологические сборы и налоги связанные с утилизацией строительного мусора и отходов, прочие расходы, в т.ч. непредвиденные.
2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является фиксированной в период действия настоящего Контракта и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством.
2.4.  Оплата  работ производится за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
	Дата начала работ: со дня заключения муниципального контракта
	Дата окончания работ:  15 сентября   2012 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Обязательства Подрядчика:
4.1.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результат  работ Заказчику в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего Контракта.
4.1.2.   Обеспечить:
а) производство работ в полном соответствии с  техническими регламентами (строительными нормами и правилами);
б) качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, межгосударственными  стандартами и требованиями;
в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
г) возведение  собственными силами всех временных сооружений, необходимых для выполнения работ;
д) выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, окружающей среды;
е) своевременное оформление в ходе работ  исполнительно-технической документации; 
ж)  представление  Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2  (далее – акты формы КС-2);
з) содержание строительной площадки в надлежащем виде.
4.1.3. При окончательном выполнении работ по настоящему Контракту известить об этом Заказчика в 10-дневный срок для организации приемки объекта приемочной комиссией.
4.1.4. Немедленно письменно известить Заказчика  и до получения от него  указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
б) иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых  работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.2.  Обязательства Заказчика:
4.2.1. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном  разделом  5 настоящего Контракта.
4.2.2. Оплатить работы на условиях, предусмотренных разделами 2, 12 настоящего Контракта.
4.2.3. Для приемки работ создать приемочную комиссию.
 4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Заказчик приказом назначает своего представителя, который от его имени осуществляет  приемку выполненных работ, подписывает акты  формы  КС-2,  акты на скрытые работы и другие документы, связанные с выполнением работ.
5.2.  Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2   и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3  (далее – справки формы КС-3).  Заказчик в течение 5 дней после предоставления вышеуказанных документов обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ.
5.3. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных  для самого Заказчика и других лиц  последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.4. Подрядчик при окончательном выполнении работ по настоящему Контракту в 2-дневный срок извещает об этом Заказчика для организации приемки выполненных работ приемочной комиссией и предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. 
5.5. Заказчик приказом создает приемочную комиссию для приемки выполненных работ.  
По результатам работы приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненных работ. 
Подрядчик обязан устранить выявленные приемочной комиссией недостатки (дефекты) в определенный указанной комиссией срок. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта на протяжении гарантийного срока. 
6.2. Гарантийный срок в отношении материалов и работ  по настоящему Контракту устанавливается  24 месяца  со дня подписания Акта приемки выполненных работ. В отношении изделий, комплектующих и оборудования гарантийный срок определяется согласно техническим паспортам, выданным заводами-изготовителями.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик создает комиссию и сообщает о дате и времени работы комиссии Подрядчику  за одни сутки до начала работы комиссии.  По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт. В случае, если комиссия установит, что недостатки (дефекты) возникли по вине Подрядчика, Подрядчик обязан  устранить дефекты за свой счет и в определенные Заказчиком сроки.
При отказе Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) привлечь иное лицо за счет Подрядчика.
6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц в период эксплуатации, а также в случае нарушения правил эксплуатации объекта  Заказчиком  или третьими лицами.  
          
7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями, комплектующими и оборудованием  в соответствии с локальной сметой (Приложение №2).  
7.2. Все поставляемые  для выполнения работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование должны иметь  соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.
7.3. Риск случайной гибели и случайного повреждения материалов, изделий, комплектующих, оборудования и объекта в целом до момента подписания приемочной комиссией Акта приемки несет Подрядчик.
           
8.	ЖУРНАЛ  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8.1.	Подрядчик со дня начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
8.2.	Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9.1. Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный объекту, в случае возникновения при проведении работ пожара, затопления и других аварий, не относящихся к  обстоятельствам непреодолимой силы.
9.2. После подписания приемочной комиссией Акта приемки Заказчик обеспечивает охрану объекта и несёт риск убытков в случае его повреждения.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР  ЗАКАЗЧИКА  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
10.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор  за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, комплектующих и оборудования (далее - контроль и надзор за выполнением работ),  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10.2. Для осуществления контроля и надзора за выполнением работ Заказчик назначает своего представителя, который имеет право беспрепятственного доступа на объект в любое время в течение всего периода ведения работ.
10.3. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. 
10.4. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки (дефекты) выполненных работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты) выполненных работ.
10.5. Заказчик вправе привлечь иное лицо для осуществления технического контроля и надзора за выполнением работ.

11. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
11.1. Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия.
11.2. Выполненные скрытые работы принимаются представителем  Заказчика. Подрядчик   приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
 Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 рабочих  дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
11.3. В случае, если представителем Заказчика в письменном виде  предъявлены Подрядчику   замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки указанных работ (пункт 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие выполненных скрытых работ произведено Подрядчиком без уведомления Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть таких работ, а затем – закрыть ее.
	 
12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
12.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями. 
12.2. Оплата за выполненные работы производится после подписания Актов формы №№ КС-2 и КС-3 Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания актов. 
12.3. Окончательный расчёт за выполненные работы производится после подписания двухстороннего акта на выполненные работы,    путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, при условии поступления денежных средств на счет Заказчика.
12.4. Оплата Заказчиком по Контракту производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
12.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
	
13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
13.3. Превышение Подрядчиком  объемов  работ, установленных сметной документацией выполняются Подрядчиком за свой счет.
13.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
13.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, военные действия или террористические акты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.
14.3. Стороны незамедлительно извещают другие Стороны о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.
	
15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
15.1. Любые изменения к настоящему Контракту составляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются представителями Сторон.
15.2. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права изменять проектные решения  по настоящему Контракту. 

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
16.1. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта,   разрешаются путем переговоров между Сторонами.
16.2. В случае не урегулирования споров посредством переговоров они  подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

17. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  
17.2. Настоящий Контракт в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть расторгнут по требованию Заказчика  по следующим основаниям:
17.2.1. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
17.2.2. Если отступления  от условий настоящего Контракта или иные недостатки (дефекты) выполненных работ не были устранены в порядке, установленном настоящим Контрактом, либо являются существенными и неустранимыми.

18. ПРОЧИЕ   УСЛОВИЯ
18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом  доступными третьим лицам сведения, ставшие им известными в связи с исполнением настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.  
18.2.  Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
18.3. По всем  вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте  настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея  в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться  нормами  действующего законодательства Российской Федерации. 
18.4.  Настоящий Контракт имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 к контракту: «Протокол № _____ от  ______________ »;
Приложение № 2 к контракту: «Локальная смета № 1»;
Приложение №3 к контракту: «Ведомость договорной цены». 
18.5.  Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 
Сторонами всех своих обязательств. 

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

МКОУ ДОД Сортавальского
МР РК ДЮСШ № 3
186790, РК г.Сортавала, ул.Ленина, д.3
ИНН  1007010761  
КПП  100701001  
БИК  048602001
УФК по Республики Карелия (МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3)
(Сортавальское финансовое управление)
ОКАТО 86410000000
КБК 01111301995050000130
р/с 40101810600000010006 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г.Петрозаводск
тел/факс 8(8-814-30) 4-79-47, +7921-453-04-95
E-mail: artimon84@bk.ru

Директор ____________________А.А.Евсеев
М.п.	ПОДРЯДЧИК

	

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «___» ___________2012 г. № _________

					
	
Стройка:	МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3	
Объект:	МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1                                               	
Ремонт  в спортивном зале с раздевалками и санузлами 
МКОУ ДОД Сортавальского МР РК ДЮСШ № 3 по ул.Ладожской д.15 	
Основание:		
Сметная стоимость	1033	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	51	 тыс. руб.	
	строительных работ	982	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	1,9	тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	250	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах на 2 квартал 2012 года года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	
1	ТЕРр-54-03-002 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=137,1*10,18  ЭМ=3,22*5,68  
НР=76%   (НР=1580)
СП=64%   (СП=1331)	1,476	1413,97	18,29	2087	2060	27	14,79	21,83	
			100М2 ПОДШИВКИ	1395,68	12,62			19	0,09	0,13	
2	ТЕР-15-01-047-15 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1373,38*10,18  МЗ=6926,75*3,21  ЭМ=626,57*6,28  
НР=84%   (НР=20132)
СП=37%   (СП=8868)	1,476	43231,54	4918,56	63810	23731	7260	141,39	208,7	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	16078,11	159,88			236	1,14	1,68	
3	ТЕР-08-07-002-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=864,3*10,18  МЗ=451,87*7,15  ЭМ=22,25*6,53  
НР=98%   (НР=14636)
СП=54%   (СП=8065)	1,476	13530,83	181,6	19972	14935	268	96,88	142,99	
			100М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРО	10118,36							
4	ТЕР-46-04-012-01 
(Ред.2009 И1)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
ОЗП=1811,87*10,18  ЭМ=276,78*5,69  
НР=89%   (НР=6984)
СП=48%   (СП=3767)	0,4018	20019,72	1574,88	8044	7411	633	188,54	75,76	
			100М2	18444,84	1085,8			436	7,74	3,11	
5	ТЕР-10-01-034-02 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1711,82*10,18  МЗ=9618,06*1,98  ЭМ=552,8*5,81  
НР=95%   (НР=7703)
СП=43%   (СП=3486)	0,4018	43098,82	4014,74	17317	8052	1613	189,65	76,2	
			100М2 ПРОЕМОВ	20040,32	138,8			56	0,99	0,4	
6	ССЦ01-203-0939 	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2	40,18	2650,73		106506					
			М2								
7	ТЕР-10-01-035-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1), И1 Пр.МРР №81 27.02.2010 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=257,58*10,18  МЗ=4588,43*2,24  ЭМ=20,26*6,46  
НР=95%   (НР=258)
СП=43%   (СП=117)	0,09	13457,14	163,57	1211	271	15	29,24	2,63	
			100П М	3015,49	8,4			1	0,06	0,01	
8	ССЦ01-101-2906 	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 300 ММ	9	229,07		2062					
			М								
9	ТЕРр-68-25-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА  МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК СЕТКИ - СЕТКА НА ОКНАХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=7,49*10,18  МЗ=36,62*1,52  
НР=93%   (НР=2850)
СП=48%   (СП=1471)	40,18	131,91		5300	3064		0,73	29,33	
			М2 СЕТКИ	76,25							
10	ТЕРр-61-07-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=4079,59*10,18  МЗ=2456,63*5  ЭМ=41,48*5,69  
НР=71%   (НР=3248)
СП=40%   (СП=1830)	0,1097	54049,4	236,02	5929	4556	26	383,06	42,02	
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 	41530,23	162,68			18	1,16	0,13	
11	ТЕРр-61-02-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2136,3*10,18  МЗ=1212,13*5  ЭМ=23,96*5,69  
НР=71%   (НР=11274)
СП=40%   (СП=6352)	0,727	27944,51	136,33	20316	15811	99	203,07	147,63	
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 	21747,53	93,96			68	0,67	0,49	
12	ТЕРр-62-41-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=192,82*10,18  
НР=71%   (НР=2364)
СП=40%   (СП=1332)	1,6961	1962,91		3329	3329		20,8	35,28	
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	1962,91							
13	ТЕР-15-04-025-08 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=659,87*10,18  МЗ=1629,64*3,26  ЭМ=14,03*6,5  
НР=84%   (НР=15728)
СП=37%   (СП=6928)	2,4231	13151,68	113,98	31868	18719	276	70,39	170,57	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7725,07	2,14			5	0,02	0,04	
14	ТЕР-15-04-025-08 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=659,87*10,18  МЗ=1629,64*3,26  ЭМ=14,03*6,5  
НР=84%   (НР=711)
СП=37%   (СП=313)	0,1097	13151,68	113,98	1443	847	13	70,39	7,72	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7725,07	2,14				0,02		
15	ТЕРр-62-10-006 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0 ОП П2.53 ПРИЛ.6 К=2,40	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2358*10,18  МЗ=2414,14*3,13  ЭМ=23,42*6,22  
НР=71%   (НР=2082)
СП=40%   (СП=1173)	0,122	31706,39	145,7	3868	2928	18	229,82	28,04	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	24004,44	33,72			4	0,24	0,03	
16	ТЕРр-57-05-002 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ДОСОК В ПОЛАХ ДО 3 ШТ. В ОДНОМ МЕСТЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=593,62*10,18  МЗ=1191,98*4,47  ЭМ=49,75*6,11  
НР=71%   (НР=4360)
СП=54%   (СП=3316)	1	11675,17	303,97	11675	6043	304	58,6	58,6	
			100М ДОСОК	6043,05	98,24			98	0,7	0,7	
17	ТЕРр-57-06-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОСТРОЖКА И ЦИКЛЕВКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=483,2*10,18  МЗ=1136,52*2,92  ЭМ=64,96*5,33  
НР=71%   (НР=5155)
СП=54%   (СП=3921)	1,476	8583,86	346,24	12670	7261	511	47,7	70,41	
			100М2 ПОЛА	4918,98							
18	ТЕР-15-04-025-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=664,52*10,18  МЗ=1554,19*3,12  ЭМ=14,45*6,49  
НР=84%   (НР=9651)
СП=37%   (СП=4251)	1,476	12745,86	117,21	18813	11483	173	70,89	104,63	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7779,58	4,28			6	0,03	0,04	
19	ТЕРр-67-04-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=54,14*10,18  
НР=76%   (НР=8)
СП=52%   (СП=6)	0,02	551,15		11	11		5,84	0,12	
			100ШТ	551,15							
20	ТЕРр-67-04-004 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ  ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=100,21*10,18  ЭМ=1,07*5,7  
НР=76%   (НР=47)
СП=52%   (СП=32)	0,06	1026,24	6,1	62	62		10,81	0,65	
			100ШТ	1020,14	4,17				0,03		
21	ТЕРм-08-03-593-17 
(Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КРОНШТЕЙНЫ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) - БЕЗ СТОИМОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ 
ОЗП=1611,5*10,18  МЗ=1724,19*3  ЭМ=1811,32*5,16  
НР=85%   (НР=1127)
СП=52%   (СП=690)	0,06	30924,07	9346,39	1855	984	561	136,8	8,21	
			100ШТ	16405,11	5704,63			342	40,55	2,43	
22	ТЕРм-08-02-390-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=220,9*10,18  МЗ=56,82*1,89  ЭМ=44,42*2,06  
НР=85%   (НР=1817)
СП=52%   (СП=1112)	0,95	2447,62	91,51	2325	2136	87	19,55	18,57	
			100М	2248,72	1,71			2	0,01	0,01	
23	ССЦ01-509-1832 	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х25 ММ	95	10,89		1035					
			М								
24	ТЕРм-08-02-399-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=47,18*10,18  МЗ=83,1*2,47  ЭМ=3,44*5,63  
НР=85%   (НР=390)
СП=52%   (СП=239)	0,95	704,98	19,39	670	457	18	4,22	4,01	
			100М	480,33	1,95			2	0,01	0,01	
25	ТЕРм-08-02-402-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=205,08*10,18  МЗ=319,38*1,91  ЭМ=690,97*5,51  
НР=85%   (НР=2403)
СП=52%   (СП=1470)	1,15	6504,99	3807,26	7481	2401	4378	18,36	21,11	
			100М	2087,71	370,39			426	2,27	2,61	
26	ССЦ01-501-8436 	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2	0,2142	29013,81		6215					
			1000М								
27	ТЕРм-08-03-591-04 
(Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=620,57*10,18  МЗ=258,49*3,31  ЭМ=47,18*2,93  
НР=85%   (НР=107)
СП=52%   (СП=66)	0,02	7311,23	138,25	146	126	3	52,68	1,05	
			100ШТ	6317,38	7,82				0,05		
28	ССЦ01-509-1443 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2	39,9		80					
			ШТ								
Итого: СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	356100	136678	16283		1276	
	1719		12	
							
		Прямые затраты			356100		
		Основная зарплата			136678		
		Эксплуатация машин			16283		
		в т.ч. зарплата машинистов			1719		
		Материальные затраты			203139		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	217765		
		Трудозатраты основных рабочих			1276,07		
		Трудозатраты машинистов			11,82		
		Ф О Т 			138397		
		Накладные расходы			114615		
		Сметная прибыль			60136		
		Итого : 			545477		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	98186		
		Всего с НДС :			643663		
РАЗДЕВАЛКА ЖЕНСКАЯ	
29	ТЕРр-57-02-003 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=707,78*10,18  ЭМ=51,49*5,69  
НР=71%   (НР=526)
СП=54%   (СП=400)	0,1	7498,18	292,98	750	721	29	69,87	6,99	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	7205,2	201,97			20	1,44	0,14	
30	ТЕРр-57-02-004 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1126,46*10,18  ЭМ=1750,51*4,46  
НР=71%   (НР=998)
СП=54%   (СП=759)	0,1	19274,63	7807,27	1927	1146	781	111,2	11,12	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	11467,36	2588,88			259	21	2,1	
31	ТЕРр-65-06-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1034,88*10,18  МЗ=13742,73*3,79  ЭМ=45,79*6,31  
НР=92%   (НР=97)
СП=48%   (СП=50)	0,01	62908,96	288,93	629	105	3	96	0,96	
			100ПРИБОРОВ	10535,08	46,32				0,33		
32	ТЕРр-65-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=312,34*10,18  МЗ=157,87*5,84  ЭМ=1,03*6,53  
НР=92%   (НР=117)
СП=48%   (СП=61)	0,04	4108,31	6,73	164	127		32,2	1,29	
			100М ТРУБОПРОВОДА	3179,62							
33	ТЕР-11-01-004-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=742,02*10,18  МЗ=1841,55*6,38  ЭМ=666,95*3,11  
НР=99%   (НР=868)
СП=51%   (СП=447)	0,1	23028,68	2592,76	2303	869	259	63,73	6,37	
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	8686,83	82			8	0,59	0,06	
34	ССЦ01-101-3320 	ГИДРОИЗОЛ 	12	86,29		1035					
			М2								
35	ТЕР-11-01-011-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=447,56*10,18  МЗ=1115,3*6,51  ЭМ=62,88*5,3  
НР=99%   (НР=545)
СП=51%   (СП=281)	0,1	12916,81	416,58	1292	524	42	54,52	5,45	
			100М2 СТЯЖКИ	5239,63	267,23			27	1,91	0,19	
36	ТЕР-11-01-011-02 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)   К=2
ОЗП=5,66*10,18  МЗ=276,69*6,51  ЭМ=11,16*5,13  
НР=99%   (НР=22)
СП=51%   (СП=11)	0,1	3878,25	143,13	388	13	14	1,38	0,14	
			100М2 СТЯЖКИ	132,62	88,26			9	0,63	0,06	
37	ТЕР-11-01-027-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1491,98*10,18  МЗ=8109,08*3,93  ЭМ=190,31*6,17  
НР=99%   (НР=1784)
СП=51%   (СП=919)	0,1	50803,09	1467,75	5080	1747	147	165,3	16,53	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	17466,66	549,57			55	3,99	0,4	
38	ТЕРр-63-07-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=694,71*10,18  ЭМ=156,54*4,51  
НР=69%   (НР=1182)
СП=40%   (СП=685)	0,234	7778,15	706	1820	1655	165	74,3	17,39	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	7072,15	248,6			58	1,99	0,47	
39	ТЕР-10-05-008-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1047,82*10,18  МЗ=5956,37*4,09  ЭМ=15,68*2,12  
НР=95%   (НР=3805)
СП=43%   (СП=1722)	0,3265	36669,89	41,56	11973	4005	14	111,78	36,5	
			100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	12266,78							
40	ССЦ01-101-2509 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	36,6	66,74		-2443					
			М2								
41	ССЦ01-101-2512 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	36,6	91,7		3356					
			М2								
42	ТЕР-15-02-024-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА ЛИСТАМИ ГКЛВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2158,38*10,18  МЗ=2765,68*4,47  ЭМ=110,65*7,26  
НР=84%   (НР=517)
СП=37%   (СП=228)	0,024	38634,91	1004,17	927	606	24	239,13	5,74	
			100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕР	25268,15	424,81			10	3,42	0,08	
43	ССЦ01-101-2509 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	2,52	66,74		-168					
			М2								
44	ССЦ01-101-2512 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	2,52	91,7		231					
			М2								
45	ТЕР-15-02-019-04 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) К=0,2
ОЗП=878,35*10,18  МЗ=1,81*6,67  ЭМ=50,83*8,23  
НР=84%   (НР=43)
СП=37%   (СП=19)	0,024	2163,57	104,59	52	49	3	17,42	0,42	
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2056,57	80,56			2	0,65	0,02	
46	ТЕР-15-02-019-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=679,34*10,18  МЗ=1,54*6,68  ЭМ=43,34*8,23  
НР=84%   (НР=165)
СП=37%   (СП=73)	0,2365	840,93	44,59	199	188	11	7,16	1,69	
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	795,31	34,59			8	0,28	0,07	
47	ССЦ01-101-3171 	ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR	0,031	19366,78		600					
			Т								
48	ТЕР-11-01-004-09 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ПРАЙМЕРОМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=420,73*10,18  МЗ=239,9*5,59  ЭМ=52,99*2,86  
НР=99%   (НР=440)
СП=51%   (СП=226)	0,09	6456	189,45	581	443	17	37,22	3,35	
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	4925,51	6,26			1	0,05		
49	ТЕР-15-01-019-06 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГКЛВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2519,32*10,18  МЗ=15272,7*3,46  ЭМ=68,75*7,06  
НР=84%   (НР=2260)
СП=37%   (СП=996)	0,09	82943,87	606,7	7465	2654	55	272,04	24,48	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	29493,63	411,68			37	3,21	0,29	
50	ССЦ01-101-4358 	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «ПЛИТОНИТ В»	35	8,38		293					
			КГ								
51	ССЦ01-402-0071 	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ (ФУГА) АТЛАС РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ВОДОСТОЙКАЯ	0,005	26217,72		131					
			Т								
52	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=371,93*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=270)
СП=40%   (СП=152)	0,1	8043,87	60,71	804	379	6	36,25	3,63	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3786,25	14,05			1	0,1	0,01	
53	ТЕР-15-04-005-06 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ , ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ - ВЕНТ.КОРОБ И СТЕНЫ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=365,51*10,18  МЗ=1071,95*4,2  ЭМ=12,79*6,5  
НР=84%   (НР=937)
СП=37%   (СП=413)	0,2605	8885,13	103,94	2315	1115	27	39,47	10,28	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	4279	2,14			1	0,02		
54	ТЕРр-62-33-002 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=684,46*10,18  МЗ=558,87*2,91  ЭМ=1,03*6,53  
НР=71%   (НР=99)
СП=40%   (СП=56)	0,02	8600,84	6,73	172	139		65,94	1,32	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	6967,8							
55	ТЕРр-56-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1706,94*10,18  ЭМ=348,63*4,41  
НР=73%   (НР=131)
СП=50%   (СП=90)	0,01	18914,11	1537,46	189	174	15	179,3	1,79	
			100КОРОБОК	17376,65	482,94			5	3,97	0,04	
56	ТЕРр-56-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=342,48*10,18  
НР=73%   (НР=43)
СП=50%   (СП=30)	0,0168	3486,45		59	59		36,28	0,61	
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3486,45							
57	ТЕР-10-01-039-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1469,7*10,18  МЗ=5117,26*3,09  ЭМ=481,99*6,53  
НР=95%   (НР=275)
СП=43%   (СП=124)	0,0168	36952,37	3934,26	621	289	66	158,7	2,67	
			100М2 ПРОЕМОВ	17205,78							
58	ССЦ01-1000-0197 	ДВЕРНОЙ БЛОК  FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ  (ПОЛОТНО+КОРОБКА)	1	2775,76		2776					
			ШТ								
59	ССЦ01-101-2001 	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ РАЗМЕРОМ 230Х26 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ ИЛИ ОКРАШЕННЫЕ	1	25,07		25					
			КОМПЛ								
60	ТЕРр-67-08-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1018,41*10,18  ЭМ=1,07*5,7  
НР=76%   (НР=157)
СП=52%   (СП=108)	0,02	10373,51	6,1	207	207		89,1	1,78	
			100ШТ	10367,41	4,17				0,03		
61	ССЦ01-509-0760 	СВЕТИЛЬНИКИ НББ 01-60	2	236,85		474					
			ШТ								
62	ТЕРр-67-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=259,8*9,89  
НР=76%   (НР=20)
СП=52%   (СП=14)	0,01	2569,42		26	26		24,1	0,24	
			100ШТ	2569,42							
63	ССЦ01-509-1443 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1	39,9		40					
			ШТ								
64	ТЕРм-08-02-390-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=220,9*10,18  МЗ=56,82*1,89  ЭМ=44,42*2,06  
НР=85%   (НР=478)
СП=52%   (СП=292)	0,25	2447,62	91,51	612	562	23	19,55	4,89	
			100М	2248,72	1,71				0,01		
65	ССЦ01-509-1832 	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х25 ММ	25	10,89		272					
			М								
66	ТЕРм-08-02-399-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=47,18*10,18  МЗ=83,1*2,47  ЭМ=3,44*5,63  
НР=85%   (НР=102)
СП=52%   (СП=62)	0,25	704,98	19,39	176	120	5	4,22	1,06	
			100М	480,33	1,95				0,01		
67	ССЦ01-501-8436 	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2	0,026	29013,81		754					
			1000М								
Итого: РАЗДЕВАЛКА ЖЕНСКАЯ	48107	17922	1706		167	
	501		4	
							
		Прямые затраты			48107		
		Основная зарплата			17922		
		Эксплуатация машин			1706		
		в т.ч. зарплата машинистов			501		
		Материальные затраты			28479		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	30529		
		Трудозатраты основных рабочих			166,67		
		Трудозатраты машинистов			3,94		
		Ф О Т 			18423		
		Накладные расходы			15881		
		Сметная прибыль			8218		
		Итого : 			74256		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	13366		
		Всего с НДС :			87622		
РАЗДЕВАЛКА МУЖСКАЯ	
68	ТЕРр-57-02-003 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=707,78*10,18  ЭМ=51,49*5,69  
НР=71%   (НР=604)
СП=54%   (СП=460)	0,115	7498,18	292,98	862	828	34	69,87	8,04	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	7205,2	201,97			23	1,44	0,17	
69	ТЕРр-57-02-004 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1126,46*10,18  ЭМ=1750,51*4,46  
НР=71%   (НР=1148)
СП=54%   (СП=873)	0,115	19274,63	7807,27	2217	1319	898	111,2	12,79	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	11467,36	2588,88			298	21	2,42	
70	ТЕРр-65-06-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1034,88*10,18  МЗ=13742,73*3,79  ЭМ=45,79*6,31  
НР=92%   (НР=97)
СП=48%   (СП=50)	0,01	62908,96	288,93	629	105	3	96	0,96	
			100ПРИБОРОВ	10535,08	46,32				0,33		
71	ТЕРр-65-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=312,34*10,18  МЗ=157,87*5,84  ЭМ=1,03*6,53  
НР=92%   (НР=117)
СП=48%   (СП=61)	0,04	4108,31	6,73	164	127		32,2	1,29	
			100М ТРУБОПРОВОДА	3179,62							
72	ТЕР-11-01-004-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=742,02*10,18  МЗ=1841,55*6,38  ЭМ=666,95*3,11  
НР=99%   (НР=998)
СП=51%   (СП=514)	0,115	23028,68	2592,76	2648	999	298	63,73	7,33	
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	8686,83	82			9	0,59	0,07	
73	ССЦ01-101-3320 	ГИДРОИЗОЛ 	13,34	86,29		1151					
			М2								
74	ТЕР-11-01-011-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=447,56*10,18  МЗ=1115,3*6,51  ЭМ=62,88*5,3  
НР=99%   (НР=628)
СП=51%   (СП=323)	0,115	12916,81	416,58	1485	603	48	54,52	6,27	
			100М2 СТЯЖКИ	5239,63	267,23			31	1,91	0,22	
75	ТЕР-11-01-011-02 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)   К=2
ОЗП=5,66*10,18  МЗ=276,69*6,51  ЭМ=11,16*5,13  
НР=99%   (НР=25)
СП=51%   (СП=13)	0,115	3878,25	143,13	446	15	16	1,38	0,16	
			100М2 СТЯЖКИ	132,62	88,26			10	0,63	0,07	
76	ТЕР-11-01-027-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1491,98*10,18  МЗ=8109,08*3,93  ЭМ=190,31*6,17  
НР=99%   (НР=2051)
СП=51%   (СП=1057)	0,115	50803,09	1467,75	5842	2009	169	165,3	19,01	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	17466,66	549,57			63	3,99	0,46	
77	ТЕРр-63-07-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=694,71*10,18  ЭМ=156,54*4,51  
НР=69%   (НР=1515)
СП=40%   (СП=878)	0,3	7778,15	706	2333	2121	212	74,3	22,29	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	7072,15	248,6			75	1,99	0,6	
78	ТЕР-10-05-008-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1047,82*10,18  МЗ=5956,37*4,09  ЭМ=15,68*2,12  
НР=95%   (НР=5165)
СП=43%   (СП=2338)	0,4432	36669,89	41,56	16252	5437	18	111,78	49,54	
			100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П	12266,78							
79	ССЦ01-101-2509 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	50	66,74		-3337					
			М2								
80	ССЦ01-101-2512 	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	50	91,7		4585					
			М2								
81	ТЕР-11-01-004-09 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ПРАЙМЕРОМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=420,73*10,18  МЗ=239,9*5,59  ЭМ=52,99*2,86  
НР=99%   (НР=440)
СП=51%   (СП=226)	0,09	6456	189,45	581	443	17	37,22	3,35	
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	4925,51	6,26			1	0,05		
82	ТЕР-15-01-019-06 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГКЛВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2519,32*10,18  МЗ=15272,7*3,46  ЭМ=68,75*7,06  
НР=84%   (НР=2260)
СП=37%   (СП=996)	0,09	82943,87	606,7	7465	2654	55	272,04	24,48	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	29493,63	411,68			37	3,21	0,29	
83	ССЦ01-101-4358 	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «ПЛИТОНИТ В»	34	8,38		285					
			КГ								
84	ССЦ01-402-0071 	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ (ФУГА) АТЛАС РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ВОДОСТОЙКАЯ	0,005	26217,72		131					
			Т								
85	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=371,93*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=310)
СП=40%   (СП=175)	0,115	8043,87	60,71	925	435	7	36,25	4,17	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3786,25	14,05			2	0,1	0,01	
86	ТЕР-15-02-019-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=679,34*10,18  МЗ=1,54*6,68  ЭМ=43,34*8,23  
НР=84%   (НР=246)
СП=37%   (СП=108)	0,3532	840,93	44,59	297	281	16	7,16	2,53	
			100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	795,31	34,59			12	0,28	0,1	
87	ССЦ01-101-3171 	ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR	0,042	19366,78		813					
			Т								
88	ТЕР-15-04-005-06 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ , ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ - ВЕНТ.КОРОБ И СТЕНЫ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=365,51*10,18  МЗ=1071,95*4,2  ЭМ=12,79*6,5  
НР=84%   (НР=1270)
СП=37%   (СП=559)	0,3532	8885,13	103,94	3138	1511	37	39,47	13,94	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	4279	2,14			1	0,02	0,01	
89	ТЕРр-56-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1706,94*10,18  ЭМ=348,63*4,41  
НР=73%   (НР=131)
СП=50%   (СП=90)	0,01	18914,11	1537,46	189	174	15	179,3	1,79	
			100КОРОБОК	17376,65	482,94			5	3,97	0,04	
90	ТЕРр-56-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=342,48*10,18  
НР=73%   (НР=43)
СП=50%   (СП=30)	0,0168	3486,45		59	59		36,28	0,61	
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3486,45							
91	ТЕР-10-01-039-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1469,7*10,18  МЗ=5117,26*3,09  ЭМ=481,99*6,53  
НР=95%   (НР=275)
СП=43%   (СП=124)	0,0168	36952,37	3934,26	621	289	66	158,7	2,67	
			100М2 ПРОЕМОВ	17205,78							
92	ССЦ01-1000-0197 	ДВЕРНОЙ БЛОК  FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ  (ПОЛОТНО+КОРОБКА)	1	2775,76		2776					
			ШТ								
93	ССЦ01-101-2001 	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ РАЗМЕРОМ 230Х26 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ ИЛИ ОКРАШЕННЫЕ	1	25,07		25					
			КОМПЛ								
94	ТЕРр-67-08-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1018,41*10,18  ЭМ=1,07*5,7  
НР=76%   (НР=157)
СП=52%   (СП=108)	0,02	10373,51	6,1	207	207		89,1	1,78	
			100ШТ	10367,41	4,17				0,03		
95	ССЦ01-509-0760 	СВЕТИЛЬНИКИ НББ 01-60	2	236,85		474					
			ШТ								
96	ТЕРр-67-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=259,8*9,89  
НР=76%   (НР=20)
СП=52%   (СП=14)	0,01	2569,42		26	26		24,1	0,24	
			100ШТ	2569,42							
97	ССЦ01-509-1443 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1	39,9		40					
			ШТ								
98	ТЕРм-08-02-390-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=220,9*10,18  МЗ=56,82*1,89  ЭМ=44,42*2,06  
НР=85%   (НР=364)
СП=52%   (СП=223)	0,19	2447,62	91,51	465	428	17	19,55	3,71	
			100М	2248,72	1,71				0,01		
99	ССЦ01-509-1832 	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х25 ММ	19	10,89		207					
			М								
100	ТЕРм-08-02-399-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=47,18*10,18  МЗ=83,1*2,47  ЭМ=3,44*5,63  
НР=85%   (НР=77)
СП=52%   (СП=47)	0,19	704,98	19,39	134	91	4	4,22	0,8	
			100М	480,33	1,95				0,01		
101	ССЦ01-501-8436 	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2	0,02	29013,81		580					
			1000М								
Итого: РАЗДЕВАЛКА МУЖСКАЯ	54715	20161	1930		188	
	567		4	
							
		Прямые затраты			54715		
		Основная зарплата			20161		
		Эксплуатация машин			1930		
		в т.ч. зарплата машинистов			567		
		Материальные затраты			32624		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	34973		
		Трудозатраты основных рабочих			187,75		
		Трудозатраты машинистов			4,45		
		Ф О Т 			20728		
		Накладные расходы			17941		
		Сметная прибыль			9267		
		Итого : 			84272		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	15169		
		Всего с НДС :			99441		
САН/УЗЛЫ- 2 ШТ.	
102	ТЕРр-65-06-024 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2285,36*10,18  МЗ=920,07*4,41  ЭМ=97,13*6,31  
НР=92%   (НР=431)
СП=48%   (СП=225)	0,02	27935,36	612,89	559	466	12	212	4,24	
			100ПРИБОРОВ	23264,96	98,24			2	0,7	0,01	
103	ССЦ01-301-0820 	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ОВАЛЬНЫЕ СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 400-500Х300Х135 ММ	2	794,35		1589					
			КОМПЛ								
104	ССЦ01-301-0554 	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670-630Х240-180, 200-175 ММ	2	561,17		1122					
			ШТ								
105	ССЦ01-301-1527 	СМЕСИТЕЛИ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ДЛЯ МОЙКИ НАСТОЛЬНЫЙ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ	2	1824,18		3648					
			ШТ								
106	ТЕРр-65-06-012 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА «КОМПАКТ» (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=4448,91*10,18  МЗ=37729*7,83  ЭМ=104,06*6,32  
НР=92%   (НР=835)
СП=48%   (СП=436)	0,02	341365,63	657,66	6827	906	13	412,7	8,25	
			100ПРИБОРОВ	45289,9	105,26			2	0,75	0,02	
107	ТЕРр-57-02-003 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=707,78*10,18  ЭМ=51,49*5,69  
НР=71%   (НР=315)
СП=54%   (СП=240)	0,06	7498,18	292,98	450	432	18	69,87	4,19	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	7205,2	201,97			12	1,44	0,09	
108	ТЕРр-57-02-004 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1126,46*10,18  ЭМ=1750,51*4,46  
НР=71%   (НР=599)
СП=54%   (СП=455)	0,06	19274,63	7807,27	1156	688	468	111,2	6,67	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	11467,36	2588,88			155	21	1,26	
109	ТЕР-11-01-004-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=742,02*10,18  МЗ=1841,55*6,38  ЭМ=666,95*3,11  
НР=99%   (НР=521)
СП=51%   (СП=268)	0,06	23028,68	2592,76	1382	521	156	63,73	3,82	
			100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	8686,83	82			5	0,59	0,04	
110	ССЦ01-101-3320 	ГИДРОИЗОЛ 	7	86,29		604					
			М2								
111	ТЕР-11-01-011-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=447,56*10,18  МЗ=1115,3*6,51  ЭМ=62,88*5,3  
НР=99%   (НР=327)
СП=51%   (СП=168)	0,06	12916,81	416,58	775	314	25	54,52	3,27	
			100М2 СТЯЖКИ	5239,63	267,23			16	1,91	0,11	
112	ТЕР-11-01-011-02 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)   К=2
ОЗП=5,66*10,18  МЗ=276,69*6,51  ЭМ=11,16*5,13  
НР=99%   (НР=13)
СП=51%   (СП=7)	0,06	3878,25	143,13	233	8	9	1,38	0,08	
			100М2 СТЯЖКИ	132,62	88,26			5	0,63	0,04	
113	ТЕР-11-01-027-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1491,98*10,18  МЗ=8109,08*3,93  ЭМ=190,31*6,17  
НР=99%   (НР=1070)
СП=51%   (СП=551)	0,06	50803,09	1467,75	3048	1048	88	165,3	9,92	
			100М2 ПОКРЫТИЯ	17466,66	549,57			33	3,99	0,24	
114	ТЕР-11-01-039-02 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=142,64*10,18  МЗ=97,1*6,38  ЭМ=4,94*6,53  
НР=99%   (НР=149)
СП=51%   (СП=77)	0,09	2329,79	40,36	210	150	4	14,35	1,29	
			100М ПЛИНТУСА	1669,93							
115	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0 ОП П1.75 Козп=1,15	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) (В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА МЕНЕЕ 5 М2)
ОЗП=427,72*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=186)
СП=40%   (СП=105)	0,06	8611,8	60,71	517	261	4	41,69	2,5	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	4354,18	14,05			1	0,1	0,01	
116	ТЕРр-62-07-006 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0 ОП П1.75 Козп=1,15	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) (В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА МЕНЕЕ 5 М2)
ОЗП=893,07*10,18  МЗ=966,05*3,07  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=1088)
СП=40%   (СП=613)	0,1683	12117,9	60,71	2039	1530	10	87,04	14,65	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	9091,42	14,05			2	0,1	0,02	
117	ТЕР-15-01-019-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2984,98*10,18  МЗ=11960,19*3,4  ЭМ=42,67*5,89  
НР=84%   (НР=8536)
СП=37%   (СП=3760)	0,2893	75923,93	314,17	21965	10110	91	314,64	91,03	
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО	34945,11	179,58			52	1,29	0,37	
118	ТЕРр-56-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1706,94*10,18  ЭМ=348,63*4,41  
НР=73%   (НР=261)
СП=50%   (СП=179)	0,02	18914,11	1537,46	378	347	31	179,3	3,59	
			100КОРОБОК	17376,65	482,94			10	3,97	0,08	
119	ТЕРр-56-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=342,48*10,18  
НР=73%   (НР=85)
СП=50%   (СП=59)	0,0336	3486,45		117	117		36,28	1,22	
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3486,45							
120	ТЕР-10-01-039-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1469,7*10,18  МЗ=5117,26*3,09  ЭМ=481,99*6,53  
НР=95%   (НР=550)
СП=43%   (СП=249)	0,0336	36952,37	3934,26	1242	579	132	158,7	5,33	
			100М2 ПРОЕМОВ	17205,78							
121	ССЦ01-1000-0197 	ДВЕРНОЙ БЛОК  FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ  (ПОЛОТНО+КОРОБКА)	2	2775,76		5552					
			ШТ								
122	ССЦ01-101-2001 	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ РАЗМЕРОМ 230Х26 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ ИЛИ ОКРАШЕННЫЕ	2	25,07		50					
			КОМПЛ								
123	ТЕРр-67-08-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1018,41*10,18  ЭМ=1,07*5,7  
НР=76%   (НР=157)
СП=52%   (СП=108)	0,02	10373,51	6,1	207	207		89,1	1,78	
			100ШТ	10367,41	4,17				0,03		
124	ССЦ01-509-0760 	СВЕТИЛЬНИКИ НББ 01-60	2	236,85		474					
			ШТ								
125	ТЕРр-67-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=259,8*10,18  
НР=76%   (НР=40)
СП=52%   (СП=28)	0,02	2644,76		53	53		24,1	0,48	
			100ШТ	2644,76							
126	ССЦ01-509-1441 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2	39,23		78					
			ШТ								
127	ТЕРм-08-02-390-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=220,9*10,18  МЗ=56,82*1,89  ЭМ=44,42*2,06  
НР=85%   (НР=804)
СП=52%   (СП=492)	0,42	2447,62	91,51	1028	945	38	19,55	8,21	
			100М	2248,72	1,71			1	0,01	0,01	
128	ССЦ01-509-1832 	КАБЕЛЬ-КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 25Х25 ММ	42	10,89		457					
			М								
129	ТЕРм-08-02-399-01 
(Ред.2009 И1), И2 Пр.МРР №747 21.12.2010 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=47,18*10,18  МЗ=83,1*2,47  ЭМ=3,44*5,63  
НР=85%   (НР=173)
СП=52%   (СП=106)	0,42	704,98	19,39	296	202	8	4,22	1,77	
			100М	480,33	1,95			1	0,01	0,01	
130	ССЦ01-501-8436 	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521-009-05755714-98, NYМ 3Х1,5 ММ2	0,043	29013,81		1248					
			1000М								
Итого: САН/УЗЛЫ- 2 ШТ.	57304	18884	1107		172	
	297		2	
							
		Прямые затраты			57304		
		Основная зарплата			18884		
		Эксплуатация машин			1107		
		в т.ч. зарплата машинистов			297		
		Материальные затраты			37313		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	40000		
		Трудозатраты основных рабочих			172,31		
		Трудозатраты машинистов			2,29		
		Ф О Т 			19181		
		Накладные расходы			16140		
		Сметная прибыль			8126		
		Итого : 			84257		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	15166		
		Всего с НДС :			99423		
КОРИДОР	
131	ТЕРр-62-41-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=192,82*10,18  
НР=71%   (НР=354)
СП=40%   (СП=200)	0,254	1962,91		499	499		20,8	5,28	
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	1962,91							
132	ТЕР-15-04-025-08 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=659,87*10,18  МЗ=1629,64*3,26  ЭМ=14,03*6,5  
НР=84%   (НР=1650)
СП=37%   (СП=727)	0,254	13151,68	113,98	3341	1963	29	70,39	17,88	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7725,07	2,14			1	0,02		
133	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=371,93*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=547)
СП=40%   (СП=308)	0,2029	8043,87	60,71	1632	768	12	36,25	7,36	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3786,25	14,05			3	0,1	0,02	
134	ТЕРр-57-15-003 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА МЕТЛАХСКИХ ПЛИТОК В ПОЛАХ ДО 10 ШТ. (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) - БЕЗ СТОИМОСТИ ПЛИТКИ
ОЗП=168,66*10,18  МЗ=10,48*6,11  ЭМ=13,88*6,31  
НР=71%   (НР=1229)
СП=54%   (СП=935)	1	1868,57	87,58	1869	1717	88	16,65	16,65	
			100ПЛИТОК	1716,96	14,05			14	0,1	0,1	
135	ТЕР-10-01-039-05 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ЗАМЕНА ЛЮКА ДЕРЕВЯННОГО  В КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ (В ЗДАНИИ) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1719,01*10,18  МЗ=55444,44*6,62  ЭМ=2218,21*5,65  
НР=95%   (НР=217)
СП=43%   (СП=98)	0,01	402832,78	15666,12	4028	201	157	196,9	1,97	
			100М2 ПРОЕМОВ	20124,47	2674,69			27	16,38	0,16	
Итого: КОРИДОР	11369	5148	286		49	
	45		0	
							
		Прямые затраты			11369		
		Основная зарплата			5148		
		Эксплуатация машин			286		
		в т.ч. зарплата машинистов			45		
		Материальные затраты			5935		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	6362		
		Трудозатраты основных рабочих			49,14		
		Трудозатраты машинистов			0,29		
		Ф О Т 			5193		
		Накладные расходы			3997		
		Сметная прибыль			2268		
		Итого : 			18061		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	3251		
		Всего с НДС :			21312		
ХОЛЛ	
136	ТЕРр-62-41-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=192,82*10,18  
НР=71%   (НР=571)
СП=40%   (СП=322)	0,4096	1962,91		804	804		20,8	8,52	
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	1962,91							
137	ТЕР-15-04-025-08 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=659,87*10,18  МЗ=1629,64*3,26  ЭМ=14,03*6,5  
НР=84%   (НР=2659)
СП=37%   (СП=1171)	0,4096	13151,68	113,98	5387	3164	47	70,39	28,83	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7725,07	2,14			1	0,02	0,01	
138	ТЕРр-57-05-002 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СМЕНА ДОСОК В ПОЛАХ ДО 3 ШТ. В ОДНОМ МЕСТЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=593,62*10,18  МЗ=1191,98*4,47  ЭМ=49,75*6,11  
НР=71%   (НР=2616)
СП=54%   (СП=1990)	0,6	11675,17	303,97	7005	3626	182	58,6	35,16	
			100М ДОСОК	6043,05	98,24			59	0,7	0,42	
139	ТЕРр-57-06-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОСТРОЖКА И ЦИКЛЕВКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=483,2*10,18  МЗ=1136,52*2,92  ЭМ=64,96*5,33  
НР=71%   (НР=729)
СП=54%   (СП=555)	0,2088	8583,86	346,24	1792	1027	72	47,7	9,96	
			100М2 ПОЛА	4918,98							
140	ТЕР-15-04-025-03 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=664,52*10,18  МЗ=1554,19*3,12  ЭМ=14,45*6,49  
НР=84%   (НР=1366)
СП=37%   (СП=602)	0,2088	12745,86	117,21	2661	1625	24	70,89	14,8	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	7779,58	4,28			1	0,03	0,01	
141	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=371,93*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=564)
СП=40%   (СП=318)	0,2088	8043,87	60,71	1680	791	13	36,25	7,57	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3786,25	14,05			3	0,1	0,02	
Итого: ХОЛЛ	19329	11037	338		105	
	64		0	
							
		Прямые затраты			19329		
		Основная зарплата			11037		
		Эксплуатация машин			338		
		в т.ч. зарплата машинистов			64		
		Материальные затраты			7954		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	8527		
		Трудозатраты основных рабочих			104,84		
		Трудозатраты машинистов			0,45		
		Ф О Т 			11101		
		Накладные расходы			8505		
		Сметная прибыль			4958		
		Итого : 			33365		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	6006		
		Всего с НДС :			39371		
ТАМБУР	
142	ТЕРр-56-09-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=1706,94*10,18  ЭМ=348,63*4,41  
НР=73%   (НР=131)
СП=50%   (СП=90)	0,01	18914,11	1537,46	189	174	15	179,3	1,79	
			100КОРОБОК	17376,65	482,94			5	3,97	0,04	
143	ТЕРр-56-10-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=342,48*10,18  
НР=73%   (НР=73)
СП=50%   (СП=50)	0,0288	3486,45		100	100		36,28	1,04	
			100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3486,45							
144	ТЕР-10-01-047-01 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2537,42*10,18  МЗ=17066,61*2  ЭМ=667,27*5,25  
НР=95%   (НР=819)
СП=43%   (СП=371)	0,0288	68217,81	4378,97	1965	856	126	277,38	7,99	
			100М2 ПРОЕМОВ	29705,62	220,96			6	1,58	0,05	
145	ССЦ01-1000-0216 	ДВЕРЬ ВХОДНАЯ СТАЛЬНАЯ "ФОРПОСТ" МОД. 128 С	2,88	6728,56		19378					
			М2								
146	ТЕРр-61-07-001 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=4079,59*10,18  МЗ=2456,63*5  ЭМ=41,48*5,69  
НР=71%   (НР=474)
СП=40%   (СП=267)	0,016	54049,4	236,02	865	664	4	383,06	6,13	
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 	41530,23	162,68			3	1,16	0,02	
147	ТЕРр-62-17-005 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0 ОП П1.75 Козп=1,15	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) (В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА МЕНЕЕ 5 М2)
ОЗП=427,72*10,18  МЗ=1537,33*2,73  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=131)
СП=40%   (СП=74)	0,042	8611,8	60,71	362	183	3	41,69	1,75	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	4354,18	14,05			1	0,1		
148	ТЕРр-62-07-006 
(Ред.2009 И1) МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0 ОП П1.75 Козп=1,15	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) (В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА МЕНЕЕ 5 М2)
ОЗП=893,07*10,18  МЗ=966,05*3,07  ЭМ=9,76*6,22  
НР=71%   (НР=963)
СП=40%   (СП=543)	0,149	12117,9	60,71	1806	1355	9	87,04	12,97	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	9091,42	14,05			2	0,1	0,01	
149	ТЕРр-62-10-006 
(Ред.2009 И1) ОП П2.53 ПРИЛ.6 К=2,40 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,0 Кэм=1,0	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=2358*10,18  МЗ=2414,14*3,13  ЭМ=23,42*6,22  
НР=71%   (НР=491)
СП=40%   (СП=277)	0,0288	31706,39	145,7	913	691	4	229,82	6,62	
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	24004,44	33,72			1	0,24	0,01	
Итого: ТАМБУР	25578	4023	161		38	
	18		0	
							
		Прямые затраты			25578		
		Основная зарплата			4023		
		Эксплуатация машин			161		
		в т.ч. зарплата машинистов			18		
		Материальные затраты			21394		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	22934		
		Трудозатраты основных рабочих			38,29		
		Трудозатраты машинистов			0,13		
		Ф О Т 			4041		
		Накладные расходы			3082		
		Сметная прибыль			1672		
		Итого : 			31872		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	5737		
		Всего с НДС :			37609		
ЩИТОВАЯ	
150	ТЕРм-08-03-526-01 
(Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ)
ОЗП=21,16*10,18  МЗ=277,68*1,48  ЭМ=1,69*3,83  
НР=85%   (НР=366)
СП=52%   (СП=224)	2	632,82	6,48	1266	431	13	1,87	3,74	
			ШТ	215,37							
151	ССЦ01-509-2242 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	2	114,79		230					
			ШТ								
Итого: ЩИТОВАЯ	1496	431	13		4	

		Прямые затраты			1496		
		Основная зарплата			431		
		Эксплуатация машин			13		
		Материальные затраты			1052		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	1128		
		Трудозатраты основных рабочих			3,74		
		Ф О Т 			431		
		Накладные расходы			366		
		Сметная прибыль			224		
		Итого : 			2162		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	389		
		Всего с НДС :			2551		
УБОРКА МУСОРА	
152	СПГ-1ПКС-29-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА
ЦЕНА=3,31*4,78	10,2	15,82		161					
			Т								
153	СПГ-23ПКС-15-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА
ЦЕНА=27,83*3,69	10,2	102,69		1047					
			Т								
154	СЧЕТ № 747 ОТ 05.05.2012 	ТАЛОНЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА 
ЦЕНА=103,9/1,18	8,5	88,05		748					
			М3								
Итого: УБОРКА МУСОРА	1956					

		Прямые затраты			1956		
		Материальные затраты			748		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	802		
		Транспортировка			1208		
		Итого : 			2010		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	362		
		Всего с НДС :			2372		
Итого по смете:	575954	214284	21824		1999	
	3211		23	
							
		Прямые затраты			575954		
		Основная зарплата			214284		
		Эксплуатация машин			21824		
		в т.ч. зарплата машинистов			3211		
		Материальные затраты			338638		
		Материальные затраты с ТЗР		1,072	363020		
		Транспортировка			1208		
		Трудозатраты основных рабочих			1998,82		
		Трудозатраты машинистов			23,37		
		Ф О Т 			217495		
		Накладные расходы			180527		
		Сметная прибыль			94869		
		Итого : 			875732		
		Н Д С  - 18 % 		18 %	157632		
		Всего с НДС :			1033364		
	
Составил: 				
	
Проверил:				

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «___» ___________2012 г. № _________

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЫ

№ п/п	Наименование цены	Сумма
(в рублях) 	
1.	Начальная (максимальная)  цена контракта	1 033 000  руб. 00 коп.	
2.	Цена контракта, определенная по итогам размещения заказа		
3.	Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, определенной по итогам размещения заказа
(Высчитывается по формуле Ксн н(м)ц = ИЦК/Н(М)ЦК, где: Ксн н(м)ц – коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта; ИЦК – цена контракта, определенная по итогам размещения заказа; Н(М)ЦК – начальная (максимальная) цена контракта).		
Итого:		
Итого НДС (18%):		
Всего к оплате:		

Заказчик:	Подрядчик:	
Должность	Должность	
Ф.И.О.	Ф.И.О.